대한간호협회 ICT센터 구축 사업

제 안 요 청 서

2019년  11월  8일

사업 책임자	전략기획실	실장	한범수	02-2260-2563
사업 실무자	ICT 센터	팀장	이상철	02-2260-2565

	- -	ICT센터 구축

	- -	ICT센터 구축

목 차

Ⅰ. 사업안내

1. 사업개요	4

2. 추진배경 및 필요성	4

3. 사업범위	4

4. 기대효과	5

Ⅱ. 대상 업무 현황

1. 업무현황	6

2. 정보시스템 현황	6

3. 문제점 및 개선방향	7

Ⅲ. 사업추진 방안

1. 추진목표	8

2. 추진전략	8

3. 추진체계 및 역할	8

4. 추진일정	9

5. 추진방법	9

Ⅳ. 제안요청 내용

1. 제안요청 개요	10

2. 요구사항 목록	10

3. 상세요구사항	11

가. 시스템장비구성 요구사항	11

나. 유지관리수행 요구사항	23

다. 테스트 요구사항	24

라. 보안 요구사항	24

마. 프로젝트지원 요구사항	25

바. 프로젝트관리 요구사항	26

V. 입찰 일반사항

1. 입찰 참가자격	28

2. 입찰 및 사업자 선정방식	28

3. 기타사항	28

Ⅵ. 제안서 평가방법 및 선정안내

1. 제안서 평가방법	28

2. 기술 평가 배점 표	29

3. 협상 적격자 선정 및 협상	32

Ⅶ. 제안서 작성안내

1. 제안서 효력	32

2. 제안서 작성지침	32

3. 제안서 목차	34

Ⅷ. 안내 및 유의사항

1. 제출서류	35

2. 제안서 제출일정 및 방법	35

3. 제안서 설명회	35

4. 입찰시 유의사항	36

5. 기타 유의사항	36

< 별첨 > 제안서 작성관련 서식

별지 1. 동등이상 사업 및 유사사업 수행실적(총괄 표)	37

별지 2. 사업 수행실적 증명서	38

별지 3. 하도급 대금지급 비율 명세서	39

별지 4. 소프트웨어사업 하도급/재하도급 계약승인신청서	40

별지 5. 하도급 사업수행계획서	41

별지 6. 하도급 적정성 판단 자기평가표	42

별지 7. 청렴서약서(외부)	43

별지 8. 제안내용 조견표(목차)	44

별지 9. 일반현황 및 연혁	45

별지 10. 재무현황	46

별지 11. 조직 및 인원현황	47

별지 12. 참여기술자 자격사항 등 요약	48

별지 13. 책임자 이력사항	49

별지 14. 투입 인력별 이력사항	50

별지 15. 제조사 (정품)공급 및 기술지원 확약서	51

별지 16. 제조사 규격 증명서	52

별지 17. 공동수급표준협정서	53

< 붙임1 > 외주 용역사업 보안특약	56

< 붙임2 > 보안서약서	57

< 붙임3 > 기술등급 인정 기준 표	58

Ⅰ. 사업안내

1. 사업개요

가. 사 업 명 : ICT 센터 구축

나. 사업기간 : 계약일로부터 3.5개월

다. 예상 사업비용 : VAT포함 약 690,000,000 원

다. 계약방법 : 공개입찰 (우선 협상 대상자 선정 후 계약체결)

2. 추진배경 및 필요성

가. 추진배경

ICT센터 구축을 통한 내부 보안강화 및 협회 내 노후화 인프라 구성의 고도화 및 전산장비 통합.

나. 필요성

1) IDC에 분산되어 있는 전산장비의 통합으로 인한 전산실 구축 필요.

2) 내부 보안 및 인프라 확장.

3) 협회 사용 IP체계 정립.

3. 사업범위

가. ICT센터 구축

1) 전산실 전체 공사 진행

- 전원, UPS, 항온항습기, 소방, 건축 등 전반적인 전산실 및 기반시설 구축을 기본으로 하며

공사 완료 후 전산실 준공청소를 함.

나. 내부 N/W구성 및 보안 구축

1) 내부 N/W구축 공사

- 각 층간 L2스위치 구성 및 ICT센터 N/W구성을 포함하며, 구성 간 현재 사용 중인 인프라와

중복되지 않도록 ICT센터 구축과 동시 진행으로 한다.

2) 보안 구성

- 각 서비스 영향도를 고려함을 기본으로 하며, 기존 IDC보안 정책을 참고하여 구성한다.

다. 전산장비 이전

3) 현재 IDC(가비아/N3N클라우드)에 운영중인 전산장비 이전

※ 전체 서비스에 대한 Backup 및 상세 분석과 이전 전 모의훈련을 통하여 발견된 문제에 대해서

전체 조치 후 이전을 실시한다.

라. 장비, 솔루션 도입

- 도입 품목

종류	도입 품목	도입기준	수량(식)
기반시설	인테리어 (전산실 공사)	신규	1
	전기설비 (전산실 전원 설치)
	소방설비 (자동소화장치 설치)
	공조설비 (항온항습기 설치)
	보안설비 (CCTV 및 출입통제 설치)
	무정전전원장치 (UPS 및 배터리 설치)
	FMS시스템 (시설물관리시스템 설치)
	네트워크 기반공사 (내부 케이블 및 층간 케이블접속)
네트워크 및 보안	L2 S/W (서버팜 및 층간 스위치용도)	신규	12
	L3 S/W (상단 및 백본용도)		2
	L4 S/W (서버팜 및 DMZ용도)		3
	방화벽 (회선구간 방화벽)		1
	IPS (회선구간 IPS)		1
	웹방화벽 (DMZ용도)		2
	QoS (서비스 트래픽 분배용)		1
솔루션	DNS (외부 DNS 연동용)	신규	1
	DB 암호화 시스템		1
	IP SAN (NAS) 시스템		1
	소스코드 취약점 분석 솔루션		1
	EMS시스템 (SMS 및 NMS)		1

4. 기대효과

가. ICT센터 신규 구축으로 임대비 절감 및 회선비용 절감 효과 기대.

나. 내부 인프라 재구성으로 사용자 편의성 증대효과 기대.

다. IDC센터보다 강화된 구성으로 해킹, 각종 공격에 대한 내/외부 보안 강화 기대.

Ⅱ. 대상 업무 현황

1. 업무 현황

가. 협회 위치

1) 서울특별시 중구 동호로 314(쌍림동 88-7) 대한간호협회

나. 현재 IDC센터 위치

1) 가비아  : 서울특별시 서초구 남부순환로 2481 LG유플러스 KIDC 서초 1센터

2) N3N클라우드 : 서울특별시 양천구 목동동로 233-5 KT 목동 IDC 1센터

2. 정보시스템 현황

가. 현행 운용 장비 현황

보안상의 사유로 인하여 협회 방문 시 열람 가능

나. 현행 시스템 구성도

보안상의 사유로 인하여 협회 방문 시 열람 가능

다. 현행 S/W 구성도

보안상의 사유로 인하여 협회 방문 시 열람 가능

라. 현행 N/W 구성도

보안상의 사유로 인하여 협회 방문 시 열람 가능

3. 문제점 및 개선과제

가. 문제점

1) 각 IDC에 이원화 되어있는 전산장비에 대한 관리 미흡

2) 내부/외부 인프라 보안에 대한 취약점

3) 공인IP로 사용 중인 내부 사용자에 대한 보안 취약점

나. 개선과제

1) ICT센터 구축으로 각 IDC에 있는 전산장비 통합 및 관리 Point 일원화.

2) 새로운 인프라 구축 및 보안 구축으로 내/외부 인프라 보안강화.

3) IP체계 변경 및 재구성으로 공인IP 및 내부 보안 강화.

III. 사업추진 계획

1. 추진목표

가. 전반적인 ICT조직의 역량 강화 및 내부 인프라/조직에 대한 환경 개선.

나. 내/외부 인프라 보안의 강화.

다. 내부 인프라/조직에 대한 체계 확립.

2. 추진전략

가. 현재 서비스 및 업무처리에 지장이 없도록 ICT센터 / 내부 인프라 구축.

나. 협회에 맞는 우수한 성능 및 안정적인 신규 장비 도입 및 시설 구축.

다. 현재까지 나타난 문제점에 대한 전반적인 개선.

3. 추진체계 및 역할

가. 추진 조직도

		운영위원회
				전략기획실 (ICT팀)					사업지원국
			사업수행업체

나. 조직별 역할 및 임무

구분	역할 및 임무
운영위원회	o 사업추진을 위한 중요 의사결정
전략기획실 (ICT팀)	o 사업추진 - 설계·이전계획 수립 및 사업자 선정을 위한 기술지원 - 사업진척 관리 및 보고
사업지원국	o 효율적 사업추진을 위한 사업지원 - 각 국별 협조지원
사업수행업체	o 사업수행 - ICT 센터 내부 기반시설 공사 - 도입 장비 납품 및 설치 (전산장비 이전 포함) - 내부 네트워크 구성 및 보안시스템 구축 - 유지보수업체, 유관기관 협조체계 유지 및 기술 이전 등

4. 추진일정

가. 사업기간 : 계약일로부터 3.5개월간

나. 추진일정표

구 분	작업일정
	M1		M2		M3		M4
o 프로젝트착수
- 프로젝트계획수립
o 분석
- 현행구성 분석
- IDC이전대상 장비 분석
o 설계
- ICT센터 구축 설계
- 내부 N/W구성 설계
- 내부 인프라 보안 구성 설계
o 구축
- ICT센터 구축 공사
- 내부 N/W 구축
- 내부 인프라 보안 구축
o 구현
- 통합테스트 및 산출물 작성
o 시험운영 및 보완
o IDC이전 및 운영 모니터링
o IDC이전 후 안정화

※ 상기 추진 일정은 사업 추진과정에서 협의․조정될 수 있음

5. 추진방법

가. 입찰방식 : 공개입찰

나. 사업자 선정방식 : 우선 협상 대상자 선정 후 계약 체결

- 협회 규정에 따름

다. 평가방식 : 기술능력평가 및 입찰가격 평가

- 기술 80 + 가격 20으로 총 합 100점으로 평가한다.

※ 행안부 고시 기준 평가

Ⅳ. 제안요청 내용

1. 제안요청 개요

가. 사업범위 : 기존 협회에서 IDC임대로 사용 중인 전산장비의 일원화를 위해 추진되는 “ICT센터 구축”을

통하여 향후 전산실 이전 및 내부 인력 전문성 강화 및 ICT 조직 강화를 위한 사업

나. 기존의 IDC에서 임대 사용 중인 전산장비에 대한 내부 통합을 위해 전산실 구축과 성공적인 이전을

위한 IT환경의 조사․분석

다. 전산실 구성 설계 및 구축 방안 수립

- 네트워크 및 보안 등 전산실 환경 구축 방안 수립

- 협회 전체 N/W 재구성 및 구축 방안 수립

라. 대한간호협회의 전산 통합 환경을 위한 주요 시스템 설계

2. 요구사항 목록

가. 요구사항 총괄 표

요청사항 구분		ID부여규칙	요구 사항수
시스템장비구성 요구사항 (ECR)	Equipment Composition Requirement	ECR-000	16
유지관리수행 요구사항 (MPR)	Maintenance Project Requirement	MPR-000	1
테스트 요구사항 (TER)	Test Requirement	TER-000	2
보안 요구사항 (SER)	Security Requirement	SER-000	2
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	Project Support Requirement	PSR-000	3
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	Project Management Requirement	PMR-000	2
합계			26

3. 상세 요구사항

가. 시스템장비구성 요구사항 (ECR-Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류

ECR-001

요구사항 명

시스템장비구성 요구사항

요구사항 명칭

전산실 구축

요구

사항

상세

설명

정의

전산실 구축 정의

세부

내용

o 공통사항

- 24시간 365일 연속 운용되는 전산실의 특성을 고려하여 안정성 및 유지보수

신뢰성이 검증된 장비를 제안해야 함

- 제안하는 제품의 규격 및 수량은 요청 규격의 동등 또는 이상의 제품으로

제안해야 함

- 공사 중 안전사고가 발생하지 않도록 주의 감독하여야 하며, 특히 화재

예방에 주의하여야 함

- 기존 시설물의 운영에 문제가 없도록 조치하여야 함

o 전원공사

- 시공 공정에 대해 전기설비기술기준 등 전기관계 법령 및 규정을 준수

- 분전반은 쉽게 계폐 가능하고 노출된 장소로 설치

- 분전반은 기존 전산장비의 용량을 파악하여 운영에 문제없도록

안정적으로 구성하여야 함

- 분전반 자재는 LS산전 혹은 동급 이상의 자재를 사용하며, DM(디지털메타,

통신용), SPD(서지보호기), ELD(누전경보기) 설치

- 케이블 단말부분에 Tag 부착 및 사용 명 표기

o 전원 케이블, 트레이, 접지 공사

- 전원케이블은 국내3사(LS, 가온, 대한) 혹은 동급 이상의 자재를 사용

- 전원케이블은 end to end간 중간에 연결이 없는 하나의 전원케이블로

시공 하여야 함

- 전기실에서 전산실까지 인입 전원은 발주처에서 제공하며, 전원 용량 및

케이블 규격은 제안사와 사전에 협의하여 적절하게 포설하여야함.

- 분전반에서 전산실 각 서버 랙까지 이중화 전원으로 케이블 포설

- 분전반에서 항온항습기 전원케이블 포설

- 시공 전 랙 및 트레이 배치방안 등, 상호 협의 후 설치

- 규격 및 수량은 아래와 같거나 동등 이상으로 제안하여야 함

[트레이 요구 규격]

구분	세부규격	수량
상세 내역	○ 전기트레이 : W450 x H60, MESH 타입(분체도장) ○ 통신트레이 : W450 x H60, MESH 타입(분체도장)	각1식

- 항온항습기 송풍에 지장을 주지 않도록 이중마루 하부에 전원/통신 트레이

분리 시공하여야 함

- 전원트레이는 접지 본딩케이블을 사용하여 접지 구성

- 전원접지, 이중마루 접지, 랙 외함 접지 구성

- 전산실 기존 천정 철거 후 신규 천정 설치에 따른 LED 전등 신규 설치

- 사무공간 분리에 따른 효율적인 전산실 운영환경구성을 위해 전등회로

분리 및 전열공사

- 신규 시스템 설치 및 이전 시기에 맞게 전원케이블 포설, 리셉터클 작업,

전원테스트 및 기술지원을 하여야 함

- 모든 전원공사는 반드시 전기공사업면허를 가진 업체가 수행하여야 함

산출정보

설치확인서 / 공사사진첩

관련 요구사항

요구사항 분류

ECR-001

요구사항 명

시스템장비구성 요구사항

요구사항 명칭

전산실 구축

요구

사항

상세

설명

정의

전산실 구축 정의

세부

내용

o 항온항습기

- 공인기관 성능 인증(CE인증 등) 제품을 제안해야 함

- 기기에 사용되는 부속자재는 KS표시 제품 또는 이와 동등 이상의 제품을

사용해야 함

- 항온항습기는 안정성을 고려하여 10RT 하향식_Dual Type으로 설치하며,

실외기 위치는 고객사와 협의

- 항온항습기 내부의 결빙방지 기능을 제공해야 함

- 정전 후 자동 복구 기능이 제공되어야 함

- 장애 시 자가 진단 기능이 제공되어야 함

- 항온항습기 운영을 위한 베이스, 덕트 연결공사, 드레인 및 급수배관 연결

공사, 누수물받이함 등 추가 작업이 필요한 부분은 제안사가 수행해야 함

- 규격 및 수량은 아래와 같거나 동등 이상으로 제안하여야 함

[항온항습기 요구 규격]

구분	세부규격	수량
상세 내역	○ 용 량 : 항온항습기 공랭식 10RT(Dual Type) ○ 냉방능력 : 31,200 kcal/h 이상 ○ 재열능력 : 12,900 kcal/h 이상 ○ 가습능력 : 가습기 8L/H, 전자전극봉식 ○ 송풍능력 : 110CMM이상 ○ 송풍방식 : 공랭식 하부 토출형	1식

- 누수감지기 설치하여 누수 발생 시 알림 가능한 구성으로 한다.

o 전산실 칸막이 공사

- 기존 라디에이터와의 간섭을 최소화 하는 방향으로 설계

(공간활용도에 따라 철거여부는 담당자와 협의 후 진행)

- 전산실 공간 내 건물공조 배관(수직)은 미관을 고려하여 마감하여야함.

- 칸막이벽체는 방음, 방화 기능을 하는 제품으로 설치

- 전산실 과 사무공간과의 소음 최소화 방안 제시

- 공조효율 및 보안성 강화를 위해 전산실내 창호부분은 마감하여야 함

- 주 출입문은 대형장비 반입 및 이동동선을 고려하여 신규 설치하여여 함

- 전산실 내부는 소화가스구역으로 방화문으로 설치하여야 함.

- 기존 출입문은 전산실 공간 활용을 고려하여 폐쇠 마감하여야 한다.

- 쉬운 장비 반․출입을 위한 고정식 경사로 설치

- 기존 천정 철거 후 마이톤 마감재 사용하여 천정 마감하여야 함

o 무중단전원공급장치 (UPS)

- 안정적인 전산실의 운영 및 비상시를 대비한 무중단 전기공급설비 구축

- 유연한 배터리 구성을 위하여 30~40CELL(12V기준) 구성이 가능하여야 함

- 배터리는 풀 부하 시 30분이상의 백업시간을 지원해야 함

산출정보

설치확인서 / 공사사진첩

관련 요구사항

요구사항 분류

ECR-001

요구사항 명

시스템장비구성 요구사항

요구사항 명칭

전산실 구축

요구

사항

상세

설명

정의

전산실 구축 정의

세부

내용

- 전산실 공간 확보를 위해 랙 형태의 UPS로 설치 할 것

- 배터리함체는 전산실 상면을 고려하여 적절한 위치에 배치하고 하중보강을

시행하여야 함

- 규격 및 수량은 아래와 같거나 동등 이상으로 제안하여야 함

[UPS 및 배터리 요구 규격]

구분	세부규격	수량
상세 내역	○ 용량: 30kVA ○ 제어방식 : All IGBT PWM 제어방식 ○ 입.출력 전원: 3상4선식 380/400/415V(선택설정) ○ 역률 : 0.99 이상 ○ 효율 : 최대 95.5%(온라인모드), 최대 99%(ECO모드) ○ 배터리 규격 : 무보수무누액 배터리 ○ 배터리 수량 : 12V 65AH*40CELLS(1조) ○ 정전보상시간 : 30분 이상(Full 부하 시)	1식

o 이중마루 시공

- 600x600, 35T 사이즈 우드(WOOD)타입 판넬 전도성타일 취부

- 랙 전면부분는 공조효율을 감안한 타공판(스틸그레이팅판넬)으로 시공

- 이중마루 타공 홀에 케이블 손상 및 냉기 손실 방지를 위해 콜드락을 설치

하여 냉기 유출을 방지해야 함

- 결로방지를 위해 이중마루 하부 바닥은 결로방지패드를 설치해야 함

- 하향식 공조방식을 고려하여 이중마루 높이는 최소 300mm 이상의 높이

로 시공하여야 함.

o 소방설비

- 소방설비는 전산실 내 화재발생시 장비 및 인명을 보호하기 위하여 캐비넷

형 팩케이지 가스소화장치를 구성하여 신속하고 능동적인 소화활동이 가능

하도록 소방관련 법규를 준수하여 적합한 구축방안을 제시하고 구축

- 수동조작함, 열/연기감지기, 방출표시등, 전자싸이렌, 스피커 등 설치

- 화재연동은 출입통제장치, 항온항습기, FMS와 연동하여 화재 시 안전성

확보 및 신속한 대응을 할 수 있도록 구성하여야 함

- 화재 경보 알람이 가능한 기능 탑재

- 소화약재는 인체에 무해한 가스소화약재를 사용하여 전산실 체적에 적합한

용량을 설계 구축 하여야 함

o CCTV 및 출입통제

- CCTV 카메라는 도면 및 장비 배치도를 기준으로 사각지대가 없도록 최적

의 위치를 제안할 것

- 네트워크 녹화저장장치(NVR)는 최대 1920x1080 해상도를 지원하여야 하고,

4채널 PoE를 지원해야 하며, 녹화데이터가 유실되지 않도록 1TB 이상의

저장공간을 확보하여야 한다

산출정보

설치확인서 / 공사사진첩

관련 요구사항

요구사항 분류

ECR-001

요구사항 명

시스템장비구성 요구사항

요구사항 명칭

전산실 구축

요구

사항

상세

설명

정의

전산실 구축 정의

세부

내용

- CCTV 카메라는 소등 시에도 감시가 가능하도록 ‘돔 적외선 고정형‘으로

구축하여야 하고 촬영대상의 명확한 식별이 가능하도록 촬영소자는 2메가

이상, 해상도는 최대 1920x1080을 지원해야 하며 원활한 전원공급을 위하여

DC 또는 PoE 전원공급방식을 지원해야 함

- CCTV 카메라용 네트워크는 다른 LAN과 물리적으로 분리 되어야 함

- 규격 및 수량은 아래와 같거나 동등 이상으로 제안하여야 함

[CCTV 요구 규격]

구분	세부규격	수량
상세 내역	○ CCTV카메라 -. 2MEGA PIXEL IR IP CAMERA -. H.264, MJPEG 압축포맷 지원 ○ NVR : 4CH, 1TB이상, PoE+지원 ○ 모니터 : 22인치 LED모니터	1식

- 출입통제는 지문인식 및 카드겸용 제품으로 설치해야 한다.

- 출입통제 기기에서 출입자 출입 기록 확인 가능한 제품

- 규격 및 수량은 아래와 같거나 동등 이상으로 제안하여야 함

[지문인식기 요구 규격]

구분	세부규격	수량
상세 내역	○ 지문인식기 -. RF/지문 인식 겸용 -. 2인치 컬러LCD 이상 -. 다양한 인터페이스 지원(Wiegand, RS485 및 Relay) ○ EM LOCK/EXIT버튼	1식

- 정상작동에 필요한 기타 기자재(모니터, PoE Hub, 배관, 배선 등)를 설치

하여야 함

o 시설관리시스템 (FMS)

- UPS, 항온항습기, 소방설비, 분전반은 FMS와 연동하여 장애 발생 시 문자

통보 기능 제공

- 전산실 내 온습도센서(2개) 및 및 고휘도 온습도 디스플레이장치(1대) 설치

o 전산실 공사 완료 후 환경 개선을 위한 준공청소 실시

산출정보

설치확인서 / 공사사진첩

관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-002
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		네트워크 케이블 및 층간케이블 공사
요구 사항 상세 설명	정의	네트워크 케이블 및 층간케이블 공사 정의
	세부 내용	o 네트워크 UTP케이블은 공통으로 cat.5e이상으로 포설하며 층간 케이블은 광케이블로 포설하도록 한다. o 전산실 네트워크 케이블 공사 - 전산실 내 기반시설 공사 완료 후 네트워크 장비 및 서버에 대한 네트워크 케이블 포설 및 라벨링을 하도록 한다. o 층간 케이블공사 - 층간 Rack에 광케이블 수용을 위한 FDF설치 - 각 층 사용자에 대한 신규 케이블링 및 식별을 위한 라벨링을 하도록 함. - 잦은 자리 이동으로 인하여 유동적인 케이블링 구성방안 필요 - PC,프린터 케이블은 회색, 전화 및 Fax케이블은 파란색으로 구성함 - 사용자 및 각 층 케이블에 대하여 깔끔한 구성을 할 수 있는 방안 구성
산출정보		설치확인서 / 공사사진첩
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-003
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		L2 스위치 설치
요구 사항 상세 설명	정의	L2 스위치 6식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : 사용자/서버팜용 L2 스위치 o 도입 수량 : 사용자/서버팜용 L2 스위치 6식 o 요구 기능 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - DRAM 256Mb, Flash 128Mb 이상 - 10/100/1000 Base-T 48 Port 이상 - 1G SFP / 10G SFP+ (1G Gbic포함) Uplink 2 Port 이상 - Switching Capacity : 176 Gbps 이상 - Throughput : 131 Mpps 이상 - Loop 방지를 위한 802.1d/w/s Protocol 지원 - Telnet, SSH, HTTP, HTTPS를 통한 관리기능 지원 - Console Port를 통한 관리기능 지원 - Mac Table 16,000개 이상 - IEEE 802.3ad Link Aggregation 지원 - 모니터링을 위한 SNMP v1/2/3 지원
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서 / 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-004
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		L2 POE 스위치 설치
요구 사항 상세 설명	정의	L2 POE 스위치 6식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : L2 POE 스위치 o 도입 수량 : L2 POE 스위치 6식 o 요구 기능 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - DRAM 256Mb, Flash 128Mb 이상 - 10/100/1000 Base-T 48 Port 이상 - 1G SFP / 10G SFP+ (1G Gbic포함) Uplink 2 Port 이상 - Switching Capacity : 176 Gbps 이상 - Throughput : 131 Mpps 이상 - Loop 방지를 위한 802.1d/w/s Protocol 지원 - Telnet, SSH, HTTP, HTTPS를 통한 관리기능 지원 - Console Port를 통한 관리기능 지원 - Mac Table 16,000개 이상 - IEEE 802.3ad Link Aggregation 지원 - 모니터링을 위한 SNMP v1/2/3 지원 - 48Port 802.3at PoE+ 지원
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-005
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		L3 광스위치 설치
요구 사항 상세 설명	정의	L3 광스위치 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : L3 광스위치 1식 o L3 광 스위치 요구 기능 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - DRAM 2Gb, Flash 2Gb 이상 - 1G SFP (1G Gbic포함) 28 Port 이상 - 10G SFP+ 4 Port 이상 - Switching Capacity : 216 Gbps 이상 - Throughput : 160 Mpps 이상 - 최신 Static, Dynamic Routing Protocol 지원 - Loop 방지를 위한 802.1d/w/s Protocol 지원 - Telnet, SSH, HTTP, HTTPS를 통한 관리기능 지원 - Console Port를 통한 관리기능 지원 - IEEE 802.3ad Link Aggregation 지원 - 모니터링을 위한 SNMP v1/2/3 지원 - 향후 이중화 구성을 위한 VC(Virtual-Chassis) Port 지원
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-006
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		L3 스위치 설치
요구 사항 상세 설명	정의	L3 스위치 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : L3 스위치 1식 o L3 스위치 요구 기능 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - DRAM 2Gb, Flash 2Gb 이상 - 10/100/1000 Base-T 24 Port 이상 - 1G SFP / 10G SFP+ 4 Port 이상 - Switching Capacity : 208 Gbps 이상 - Throughput : 154 Mpps 이상 - 최신 Static, Dynamic Routing Protocol 지원 - Loop 방지를 위한 802.1d/w/s Protocol 지원 - Telnet, SSH, HTTP, HTTPS를 통한 관리기능 지원 - Console Port를 통한 관리기능 지원 - IEEE 802.3ad Link Aggregation 지원 - 모니터링을 위한 SNMP v1/2/3 지원 - 향후 이중화 구성을 위한 VC(Virtual-Chassis) Port 지원
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-007
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		L4 스위치 설치
요구 사항 상세 설명	정의	L4 스위치 3식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : L4 스위치 3식 o L4 스위치 요구 기능 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - DRAM 16Gb, SSD 120Gb이상 - 10/100/1000 Base-T 12 Port 이상 - 1G SFP 8 Port 이상 - 10G SFP+ 2 Port 이상 - L4 CPS : 초당 520,000개 이상 - Backplane : 128 Gbps 이상 - Throughput : 6 Gbps 이상 - 동시접속세션 수 : 16,000,000 이상 - 최신 Static, Dynamic Routing Protocol 지원 - Loop 방지를 위한 802.1d/w/s Protocol 지원 - Telnet, SSH, HTTP, HTTPS를 통한 관리기능 지원 - Console Port를 통한 관리기능 지원 - 모니터링을 위한 SNMP v1/2/3 지원 - 향후 이중화 구성을 위한 표준 프로토콜 (VRRP) 지원
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-008
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		방화벽 설치
요구 사항 상세 설명	정의	방화벽 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : 방화벽 1식 o 방화벽 요구 기능 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - DRAM 16Gb, SSD 256Gb, HDD 1Tb 이상 - 10/100/1000 Base-T 8 Port 이상 - 1G SFP 4 Port 이상 - Firewall Throughput : 15 Gbps 이상 - 동시접속세션 수 : 2,500,000 이상 - Telnet, SSH, HTTP, HTTPS를 통한 관리기능 지원 - Console Port를 통한 관리기능 지원 - 모니터링을 위한 SNMP v1/2/3 지원 - 향후 이중화 구성을 위한 표준 프로토콜 및 HA구성 기능 지원 - 보안정책 그룹별 설정 기능 - 국정원 CC 인증 EAL-4 이상 취득 제품
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항		CC인증서 첨부

요구사항 분류		ECR-009
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		침입방지시스템(IPS) 설치
요구 사항 상세 설명	정의	침입방지시스템(IPS) 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : 침입방지시스템(IPS) 1식 o 방화벽 요구 기능 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - CPU 8 Core, DRAM 16Gb, HDD 2Tb, SSD 64Gb 이상 - 10/100/1000 Base-T 8 Port, 1G SFP 4 Port 이상 - Throughput : 2 Gbps 이상 - 동시접속세션 수 : 10,000,000 이상 - CPS : 240,000 이상 - Telnet, SSH, HTTP, HTTPS를 통한 관리기능 지원 - Console Port를 통한 관리기능 지원 - 모니터링을 위한 SNMP v1/2/3 지원 - 실시간 탐지 및 차단, 경보 지원 - PCRE 정규식 지원 - 타 시스템 연동기능 지원 - H/W Bypass 및 S/W Bypass기능 지원 - 이중화를 위한 HA기능 지원 - 국정원 CC인증 취득 제품
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항		CC인증서 첨부

요구사항 분류		ECR-010
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		웹방화벽(WAF) 설치
요구 사항 상세 설명	정의	웹방화벽(WAF) 2식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : 웹방화벽(WAF) 2식 o 방화벽 요구 기능 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - CPU 4 Core, DRAM 16Gb, HDD 500Gb 이상 - 10/100/1000 Base-T 4 Port 이상 - 1G SFP 2 Port 이상 - Throughput : 5 Gbps 이상 - CPS : 90,000 이상 - HTTP 기반 DoS 공격에 대한 방어기능 제공 - Console Port를 통한 관리기능 지원 - 모니터링을 위한 SNMP v1/2/3 지원 - OWASP Top 10 보안 및 국정원 8대 취약점 방어 기능 - 이중화를 위한 HA기능 지원 - 개인정보 유출 및 유입 방어 기능 - CC인증 (EAL 4) 이상 취득 제품 - H/W Bypass 및 S/W Bypass 기능 지원
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항		CC인증서 첨부

요구사항 분류		ECR-011
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		QoS(Quality of Service) 설치
요구 사항 상세 설명	정의	QoS(Quality of Service) 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : QoS(Quality of Service) 1식 o QoS 요구 기능 - 실시간 트래픽 현황 모니터링 그래프 제공 - 단독형태의 하드웨어 Box 구조 - 양방향 QoS처리량 1G이상 - Throughput 2G이상 - H/W Bypass 및 S/W Bypass 지원 - SFP 1G 4 Port 이상 - 실시간 트래픽 모니터링 기능 지원 - 기간 별 트래픽 분석 및 리포트 기능 지원 - L7 기반의 트래픽 제어기능 지원
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-012
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		통합관제시스템(EMS) 설치
요구 사항 상세 설명	정의	통합관제시스템(EMS) 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : 통합관제시스템(EMS) 1식 o 요구 기능 - NMS 20식, SMS 40식 모니터링 지원 - 실시간 장비 모니터링 지원 - 직관적인 모니터링을 위한 커스터마이징 대시보드 지원 - 다양한 보고서 출력 포맷 지원 (PDF, XLS, DOC, HWP) - 네트워크 트래픽에 대한 종합적인 모니터링 기능 지원 - 서버 CPU사용률 및 DISK IO처리, 사용량 및 트래픽 모니터링 지원 - 최신 HTML 5이용 대시보드 환경 구성 지원 - 다양한 브라우저와의 호환성 제공 - 표준화 된 UI로 모바일 디바이스에서 동일한 UI/UX 제공 - 특정 장비 및 그룹에 대한 중요도 표시 기능 제공
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-013
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		DNS 설치
요구 사항 상세 설명	정의	DNS 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : DNS 1식 설치 o 요구 기능 - Hardware 일체형 Appliance 장비 - 10/100/1000 Base-T 인터페이스 2 Port 지원 - LOM(Lights out Management) 10/100/1000Mbps 이더넷 인터페이스 지원 - Mgmt port 지원, HA port 지원 - CPU : Dual Core, Memory 8Gb, HDD 1Tb - 초당 DNS쿼리 수 : 20,000/s - DNS관리 도메인 및 쿼리 도메인, 쿼리 도메인 Top10 제공 - 쿼리 현황 로그제공으로 불필요 DNS레코드 정리 기능 제공 - Blacklist 기능제공으로 특정도메인 차단 및 리다이렉트 기능 제공 - 도메인 레코드 등록 시 역방향 도메인의 레코드 자동등록 기능 제공 - 관리자 작업내역 로깅 기능 지원
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-014
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		DB 암호화 솔루션 설치
요구 사항 상세 설명	정의	DB 암호화 솔루션 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : DB암호화 솔루션 o 요구 기능 - 암호화 대상 DB는 협회 방문 시 정보 제공 - 국정원 DB암호화 요구사항 충족 및 보안 적합성 검증필 제품 - 국정원 검증필 암호화 모듈(KCMVP) 사용 제품 - 정책서버(키 관리서버) 장애 시 암/복호화 기능 유지 보장 - 암호화로 인한 컬럼 사이즈 변경이 없는 암호화 기능 - 부분 암호화 지원 (컬럼별, 테이블별 등) - 암호화 컬럼의 색인검색(일치/조건) 가능 - 파일 암호화 지원 (CSV 파일,Text 파일에서 특정 데이터만 암호화) - 중요 데이터별로 각기 다른 암호화키가 적용되어 질 수 있어야 함 - 동일 컬럼에 Plugin방식과 API방식을 동시에 적용 가능 - 복호화 시 데이터마스킹 기능을 제공하여야 함 - IP/시간별 데이터 암/복호화 권한 제어 가능 - 암호화 정책에 대한 설정, 수정, 삭제 등 로그 기록 가능 - 암호화 정책에 대한 로그 Reporting 가능 - 특정 OS 및 DBMS에 종속되지 않도록 다양한 OS 및 DBMS 지원 - HA 또는 Cluster 환경에 적용 가능 (Oracle RAC, DB 이중화 등) - 다수의 DB / 이기종 DBMS를 동시에 관리 가능
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항		CC 인증서 첨부

요구사항 분류		ECR-015
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		IP SAN (NAS) 설치
요구 사항 상세 설명	정의	IP SAN (NAS) 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : IP SAN (NAS) 1식 설치 o 요구 기능 - DISK Usable 20Tb 이상 - SAN/NAS 동시 제공하는 Unified 제품 제공 - Cache 64Gb 이상 제공 - SSD/SAS/NL-SAS 혼용 지원 - 인터페이스 1000 Base-T 4 Port이상 제공 - 프로토콜 FC/CIFC/NFS 동시 제공 - 온라인 중 단일디스크 단위로 증설 지원 또는 온라인 중 파일시스템 확장 - 빠른 백업 및 복구를 위한 성능저하 없는 Snapshot제공 - 중복제거 및 압축 기능 제공
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항

요구사항 분류		ECR-016
요구사항 명		시스템장비구성 요구사항
요구사항 명칭		소스코드 취약점 분석 솔루션 설치
요구 사항 상세 설명	정의	소스코드 취약점 분석 솔루션 1식 설치
	세부 내용	o 도입 품목 : 소스코드 취약점 분석 솔루션 1식 o 요구 기능 - 국내용 CC인증 (EAL 2이상) 획득 제품 - GS 인증 1등급 획득제품 - 행안부 소스코드 보안약점 항목, 국정원 취약점 항목, 전자금융 감독규정 항목 검출 지원 - 해외 취약점 OWASP Top10, SANS Top25, CEW, CERT, MISRA 검출 지원 - 다양한 언어 지원으로 분석 가능한 제품 - 다양한 플러그인을 제공해야 하며, 개발환경 내에서 분석 및 검출결과 확인 기능 제공 - 분석 결과에 대해 식별․조치에 용이하도록 소스파일, 코드라인 넘버, 취약 코드위치, 취약점 발생지점과 원인지점 등의 결과 과정에 대한 정확한 지적 기능 제공 - 취약점에 대해 관련된 설명, 코드예시, 해결가이드 제시 기능 제공 - 취약점 분석 모듈이 업그레이드 된 경우 개발PC에 자동 업데이트 기능제공 - 분석 결과에 대한 히스토리 관리 기능 제공 - 취약점 점검 결과에 대한 분석 결과물 제공 - 다양한 포맷의 보고서 지원 - 정의한 Code Convention, Code Style Rule을 추가 및 변경기능 제공
산출정보		설치확인서 / 제조사 규격 증명서/ 공급 및 기술지원 확약서
관련 요구사항		CC인증서 및 GS인증서

나. 유지관리수행 요구사항 (MPR-Maintenance Project Requirement)

요구사항 분류		MPR-001
요구사항 명		유지관리수행 요구사항
요구사항 명칭		이전설치 방안
요구 사항 상세 설명	정의	이전설치 방안 정의
	세부 내용	o 사업자는 이전을 위한 계획, 대책, 일정 등 이행방안 수립을 위하여 발주자와 착수회의를 진행해야 함 - 시스템 이전 계획, 방안 - 시스템 실사 및 모의훈련 일정 - 이전 모니터링 운영방안 - 시스템 중단 최소화/이전 세부계획 수립 o 이전 대상 시스템의 안정적인 이전을 위해 구성 및 내역 사전 정리 - 전체 서버에 대한 구성 및 시스템 구성 현황 (규격, 수량 등) - 네트워크 구성 현황 (회선 및 VoIP, IP주소 등) - 네트워크 포트맵 현황 - 보안장비 정책정보 - DB, WAS, APP 등 구성 현황 - 각 장비별 정지․가동절차 현황 o 안정적인 이전을 위한 이전 계획 수립 - 시스템 정지․가동, 백업(OS, 데이터 등)계획 및 문제점 도출 조치 계획 - 업무서비스 중단시간 최소화 및 최적화 수행 계획 수립 - 전산장비의 실장을 위한 랙 설치 (기존 랙 2개 재사용, 38U) - 전산장비 분산을 위한 랙 3식 추가 구매 설치 38U의 높이를 가지며 10구 전원콘센트 2개 장착 - 모의훈련 및 사전 검증 계획 수립 - 유관기관 및 대외 연계기관에 대한 서비스 중단 안내 계획 - 이전 수행시 위험요소 제거 및 장애발생 대비 시나리오 수립 - 이전 실행시 장애발생 대비 대체품 확보 계획 - 단계별 세부 이전 계획 체크리스트 작성 o 이전과정 상황 대비 및 운송차량 계획 수립 - 이전과정에서 발생할 수 있는 파손, 도난 등 이에 대비하기 위한 방안 도출 - 안전한 운송 및 이전을 위한 무진동차량 및 사다리차 사전 확보 o 이전 전 각 서비스별 S/W 및 데이터 백업 - 최종 데이터 백업 (풀백업 또는 증분백업), 백업 데이터․매체 확인 - 장애시 복구방법 및 복구 소요시간 확인 o 이전 후 운영체계 정립을 위한 전체 운영현황 정리 - 이전 시스템의 결로현상 방지, 환경적응을 위한 테스트 수행 - 보안장비 정책 설정 및 솔루션 장비 정책 현황 - 이전 후 종합 모니터링 수행
산출정보		이전설치 계획서
관련 요구사항

다. 테스트 요구사항 (TER-Test Requirement)

요구사항 분류		TER-001
요구사항 명		테스트 요구사항
요구사항 명칭		H/W 단위테스트
요구 사항 상세 설명	정의	H/W 단위테스트 방안 정의
	세부 내용	o 사업자는 신규 장비에 대해 단위테스트를 시행 하여야 함 - 신규 도입 된 장비에 대한 요구사항에 대한 충족 결과를 제출 하여야 함 - 각 장비의 기본기능 구현 결과를 스크린샷을 사용하여 문서작성 함 o 사업자는 납품되는 각 장비에 대한 백도어 무결성 확인서를 제출하여야 함.
산출정보		H/W 단위테스트 결과서, 백도어 무결성 확인서
관련 요구사항

요구사항 분류		TER-002
요구사항 명		테스트 요구사항
요구사항 명칭		통합테스트
요구 사항 상세 설명	정의	통합테스트 방안 정의
	세부 내용	o 이전 후 안정적인 운영에 대비한 각 서비스별 테스트를 해야 함 - 네트워크 구간 별 테스트 및 SLB등 각종 네트워크 테스트 - 서비스 별 확인 테스트 (실무자와 협업하여 테스트)
산출정보		통합테스트 결과서
관련 요구사항

라. 보안 요구사항 (SER-Security Requirement)

요구사항 분류		SER-001
요구사항 명		보안 요구사항
요구사항 명칭		보안관리계획
요구 사항 상세 설명	정의	보안관리계획 수립
	세부 내용	o 사업수행에 투입되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 o 사업수행 과정에서 발생하는 각종 산출물에 대한 보안관리 대책을 제시. o 사업자는 사업수행 중 보안 및 정보유출 사고 발생 시 형사처벌 및 피해 발생에 해당하는 손해배상 책임을 져야 함. o 사업자는 물리적인 보안을 위한 시건장치 등에 대한 대책을 제시.
산출정보		보안관리 대장
관련 요구사항

요구사항 분류		SER-002
요구사항 명		보안 요구사항
요구사항 명칭		보안관리지침
요구 사항 상세 설명	정의	보안관리지침 수립
	세부 내용	o 투입하는 모든 인원은 관련 양식에 의거 보안서약서를 제출해야 함. o 사업자는 본 용역 수행 중 도출 된 자료에 대해 사업 종료 시 모두 반납 및 파기하여야 하며, 사전협의 없이 외부에 제공 또는 공개 된 경우 모든 책임을 져야 함. o 사업자는 모든 관련 자료에 대해 반납 시까지 보존할 책임이 있으며 사용중 손․망실 등 하자발생에 대한 모든 책임을 져야 함. o 사업자는 본 사업수행 중 취득한 지식에 대해 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 보안관리 지침을 준수해야 함.
산출정보		투입인원 보안서약서
관련 요구사항

마. 프로젝트지원 요구사항 (PSR-Project Support Requirement)

요구사항 분류		PSR-001
요구사항 명		프로젝트지원 요구사항
요구사항 명칭		투입인력
요구 사항 상세 설명	정의	투입인력 수행조직 방안 수립
	세부 내용	o 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 추진조직, 투입인력 프로필과 단계별 투입계획(역할, 투입율 등)을 제시하며, 인력 변경은 발주자와 사업자간 협의로 변경 함. o 본 사업 컨소시엄 구성 시 업체간의 업무분담과 협력방안을 상세히 제시. o 본 사업을 수행할 총괄 수행자는 주사업자 소속으로 입찰 시 재직중인 자로 하며, 동 사업관련 수행 경험이 있는 인력을 투입하여야 함. o 각 부문별 참여 인력은 제안사 소속으로 입찰공고일 이전부터 재직중인자로 구성하고, 기술측면이나, 특정 부문에 대해 협력업체의 기술이 필요할 시 하도급으로 사전 승인을 득한 후 구성하여야 함. o 발주자는 참여인력이 수행 상 부적합하다 판단되거나 자격 미달인 경우 사업자에게 교체를 요구할 수 있으며, 사업자는 이에 협조하여야 함. o 사업자는 사업수행에 있어서 발주자의 규정 및 업무절차 등에 의거 업무를 수행하여야 함.
산출정보		투입인력 프로필, 경력증명서
관련 요구사항		경력 증빙 서류

요구사항 분류		PSR-002
요구사항 명		프로젝트지원 요구사항
요구사항 명칭		유지관리
요구 사항 상세 설명	정의	유지관리 방안 수립
	세부 내용	o 수행 결과물이 활용상 중대한 결함이 발견될 경우 보완해야 함. o 효율적인 사업추진을 위한 업무 공유방안을 제시하여야 함. o 전산센터 구축 및 운영에 필요한 각종 지침서 등, 관련 서류 제공을 함.
산출정보
관련 요구사항

요구사항 분류		PSR-003
요구사항 명		프로젝트지원 요구사항
요구사항 명칭		기술지원 및 교육
요구 사항 상세 설명	정의	기술지원 및 교육방안 수립
	세부 내용	o 발주자의 직원을 대상으로 본 사업을 통해 구축된 기자재 및 S/W의 관리에 대한 교육 계획을 수립하여야 함. o 진행 중이거나, 사업완료 후 운영상 필요한 사항의 교육 및 기술지원에 대한 대응 계획을 수립하여야 함.
산출정보		교육계획서, 교육완료 보고서
관련 요구사항

바. 프로젝트관리 요구사항 (PMR-Project Management Requirement)

요구사항 분류		PMR-001
요구사항 명		프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭		작업 장소 및 수행환경 구성
요구 사항 상세 설명	정의	작업 장소 및 수행환경 구성 방안 수립
	세부 내용	o 사업수행 장소는 공간의 협소로 인하여 외부의 공간을 사용하여야 하며 사업수행 장소에 대한 제반경비는 사업자가 부담하여야 함. o 사업수행을 위하여 필요한 전산자원 및 사무용비품은 사업자가 보유한 장비를 이용하여야 함 o 사업에 필요한 집기, 비품, 운영비 등 기타 경비는 사업자가 부담하여야 함.
산출정보
관련 요구사항

요구사항 분류		PMR-002
요구사항 명		프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭		일정, 진척관리 및 보고
요구 사항 상세 설명	정의	일정, 진척관리 및 보고 방안 수립
	세부 내용	o 발주자가 제안 요청한 추진일정 계획과 사업자가 제시한 일정계획이 다른 경우 사업기간내의 완료를 위한 방안을 제시해야 함. o 사업수행계획서에 포함되는 WBS는 요구사항과 산출물 기준으로 작성함. o 추진일정은 전체일정과 세부일정으로 구분하여 작성하여야 함. o 사업 중 이루어져야 할 각종 보고 및 검토계획을 상세히 제시해야 함. o 사업수행 중 발생하는 주요사항에 대해서는 발주자와 상호 협의하여 결정. o 기간 중 주 1회의 회의를 개최함을 원칙으로 하되, 필요시 임시 회의를 개최할 수 있음.
산출정보		주간보고, 월간보고
관련 요구사항

Ⅴ. 입찰 일반사항

1. 입찰 참가자격

가. 국가 및 지방세 체납사항이 없고, 해당 업종의 업력이 5년 이상인 자

나. 정보통신공사업법 제 14조에 따른 정보통신공사업으로 신고를 필한 업체.

다. 소프트웨어산업진흥법 제 24조에 따른 소프트웨어사업자로 신고를 필한 업체.

라. 제출 서류 등을 위조변조하거나 부정하게 행사한 자는 입찰 할 수 없음

마. 공동수급으로 제안가능하며, 구성원은 2개사 이하로 한다.

(단, 공동수급으로 제안 시 각 구성원 모두 입찰참가 자격을 모두 갖추어야 한다.)

2. 입찰 및 사업자 선정방식

가. 입찰방식 : 공개입찰

- 협회 규정에 따름

나. 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약 체결

- 기술 및 가격평가

※ 우선협상 업체와 협상이 결렬될 경우 차순위 업체와 계약 진행

3. 기타사항

가. 본 용역에 참가하고자하는 자는 제안등록 마감일 내에 접수 장소에 직접 방문하여 소정의 서류

일체를 제출하여야 하며, 우편접수는 불허함.

나. 제출 서류는 원본제출을 원칙으로 하며, 서류가 사본일 경우 “원본대조필”을 확인․날인하여 제출.

Ⅵ. 제안서 평가방법 및 선정안내

1. 제안서 평가 방법

가. 제안서 평가 원칙

1) 접수된 제안서에 대한 기술평가는 협회 규정에 따르며, 이에 대해 사업자는 이의를 제기할 수 없음.

2) 기술평가는 기술 평가 기준에 따라 평가함.

3) 제안 설명회에 참여하지 않은 업체는 실격 처리함.

4) 참가자격 등 각종 증빙서류 허위기재 및 입찰기한 내 제출하지 못하는 경우 실격 처리함.

나. 종합 평가점수

1) 평가점수(100) = 기술평가 점수(80) + 가격평가 점수(20)

2) 평가결과는 공개하지 않는 것을 원칙으로 하며, 제안업체는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음.

2. 기술 평가 배점표

가. 평가 배점표

심사항목	평가항목	평가요소	배점	비고
정량적 평가	경영상태 평가	신용평가등급 확인서1)	6
	동등이상 사업 및 유사사업 경험	최근 3년간 구축사업 실적2)	6
	기술인력(이행능력) 현황	기술자 보유 및 투입현황3)	5
	신인도	인증서 보유현황4)	3
정성적 평가 (기술평가)	전략 및 방법론	제안사업의 기술적 이해 및 적정성	4
		제안요청서와의 부합성 및 창의성
		사업범위의 명확성 및 추진전략
		제안기술 및 내용의 실현 가능성
		이전 실행계획 수립의 적정성 및 구체성	3
	신규 장비 구축 방안	신규장비 구축 방안의 적성성	4
	기술 및 기능	이전 및 구축 추진전략의 적정성	7
		목표시스템 제안의 적정성	9
		신규 도입장비 구성 방안의 적정성	6
		이행계획 수립 방안의 적정성	7
		향후 시스템의 유연한 확장에 대한 적정성	4
	H/W, S/W 도입 적정성	신규 시스템 H/W, S/W도입의 적정성	4
	사업수행계획	사업수행 조직체계 및 참여인력의 적정성	2
		사업관리 방안의 적정성 및 자원배분의 합리성
		세부추진일정의 적정성	2
		세부일정계획 도출 및 기간의 타당성
		구축 업무의 성능 및 품질 보증을 위한 방안	2
	프로젝트관리 및 지원	기밀보안 및 비상대책 방안의 적정성	2
		시험운영 방안 및 기술이전 계획의 적정성	2
		교육훈련계획, 내용 및 추진 방법	2
		유지보수 계획, 조직, 절차, 범위, 기간의 적정성

주 1) 경영상태 평가 (배점 : 6점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

주 2) 최근 3년간 구축사업 실적 (배점 : 6점)

심 사 항 목	배점	평가방법	평점	비고
최근 3년간 유사사업 수행실적 합계 금액	6	A. 6억원 이상 B. 4억원 이상 ~ 6억원 미만 C. 3억원 이상 ~ 4억원 미만 D. 3억 미만	6 5 4 3

< 평가점수 부여방법 >

1. 유사 사업은 입찰 공고일 기준 최근 3년간 종료된 사업에 한하며, 유사 용역의 적합성 여부는 대한간호협회에서 판단한다.

2. 부가세를 포함한 계약금액으로 적용한다.

3. 심사항목은 [별지 서식 1호, 2호] 및 제출된 증빙자료에 의하여 평가한다.

4. 해당증빙 자료(실적증명서) 미제출시 0점 처리한다.

5. 공동 수급의 경우 업체별 지분율에 의한 가중치를 적용한다. 예를 들어 실적금액이 각각 25억,

15억인 2개 업체가 6:4의 지분율로 제안한 경우, 21억원(25억원*60%+15억원*40%)으로 적용한다.

주 3) 기술자 보유 및 투입현황 (배점 : 5점)

심사항목	배점	등 급	평점
기술자 보유 및 투입현황	5	A. 20 point 이상	5.0
		B. 15 point 이상 ~ 20 point 미만	4.0
		C. 10 point 이상 ~ 15 point 미만	3.0
		D. 5 point 이상 ~ 10 point 미만	2.0
		E. 5 point 미만	1.0

< 평가점수 부여방법 >

1. 보유․투입 기술자는 입찰공고일 이전 제안사 소속 재직 중인 자로 한다.

2. 심사항목은 [별지서식 11호~14호, 기타증빙서류] 및 제출된 증빙자료에 의하여 평가

3. 해당증빙 자료(기술인력 증빙) 미제출시 0점 처리

4. 중복기재 불가(1인이 여러 자격증이 있을 경우 대표적인 자격증 1개만 기재 할 것)

5. 붙임2의 기술등급 인정 기준 표를 기준으로 평가

※ 기술사 6point, 특급기술자 5point, 고급기술자 4point, 중급기술자 3point, 초급기술자 2point

주 4) 인증서 보유현황 (배점 : 3점)

심사항목	배점	등 급	평점
신제품(NEP) 신기술(NET) 특허(국내특허) GS인증	3	3개 이상 보유	3.0
		2개 이상 보유	2.0
		1개 이상 보유	1.0
		미 보유	0.5

3. 협상 적격자 선정 및 협상

가. 우선 협상 대상업체 선정

1) 평가위원회에서 평가한 각 점수를 합산한 종합평가 점수를 산정하여 협상 대상업체의 순위를 결정.

단, 기술 평가점수 한도 85%미만인 업체는 협상대상에서 제외함.

2) 업체의 종합평가 점수가 동점일 경우 기술평가 점수가 높은 업체를 우선협상대상자로 선정하고

기술평가 점수가 동일하면 배점한도가 큰 기술성 평가요소 순서로 점수가 높은 업체를 우선

협상대상자로 선정함.

나. 협상 절차 및 방법

1) 협상 순위에 따라 순차적으로 협상함.

- 우선협상자와 협상 결렬시, 동일한 기준 ․ 절차에 따라 순차적으로 차(次)순위자와 협상을 함.

- 모든 협상대상자와 협상이 결렬된 경우에는 재공고 입찰이 가능함.

2) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시하되,

업체는 일부 수정 ‧ 변경 ‧ 보완 ‧ 추가 ‧ 삭제하여 그 내용의 일부를 협상 조정 가능함.

3) 가격 협상 시 기준가격은 당해 사업예산(또는 예정가격)이하로서 협상 대상자가 제안한 가격으로 함.

Ⅶ. 제안서 작성안내

1. 제안서 효력

가. 발주자의 방침이나 기타 불가항력적인 환경변화로 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경 되거나 취소되는 경우라도 사업자는 이의를 제기하지 못하며, 이에 따른 계약변경에 응하여야 함.

나. 본 사업과 관련한 제안요청서, 제안서 관련 전체 문서, 사업수행계획서 등의 내용은 계약서와 동일한 효력을 가짐.

다. 발주자는 필요시 사업자에 대하여 추가 제안 또는 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

라. 제출된 제안서의 내용은 발주자가 요청하지 않는 한 변경이 불가함.

마. 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임해야 하며 미제출시의 불이익은 제안업체가 책임짐.

2. 제안서 작성지침

가. 제시된 “제안서 목차” 및 “제안서 세부작성지침“을 준용하여 제안서를 작성하되 제안서 기재사항 양식 이외의 사항은 임의로 기재할 수 없음.

나. 제안서는 제안요구사항을 최대한 충족하도록 하고 꼭 필요한 사항 위주로 간단명료하게 작성하여야 하며 제안서 목차의 항목 중 해당내용이 없는 경우는 해당항목에 “해당없음”으로 간략하게 기술하여야 함.

다. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하고 “∼할 수도 있다”, “∼이 가능하다”, “∼을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 기술하지 않아야 함.

라. 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 하며, 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의별첨 자료로 제출하여야 함.

마. 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되 부득이한 경우 A4 횡 방향으로 작성하며 책자로 제작하여야 함.

바. 제안서 및 제안서 요약본(제안서 평가회 발표자료)는 별도 작성하되 총 분량은 표지, 간지,목차 등을 제외하여 제안서는 150page 내외, 제안서 발표본은 50page이내로 작성하야여 함.

※ 저장매체로 제출하는 제안서, 제안서 발표본은 ‘아래아 한글’, ‘MS오피스’, ‘아크로뱃’ 등의 문서편집기로 읽기가 가능한 문서형식으로 제출하되, 제안평가 시 발표자료는 프리젠테이션이 가능한 문서파일로 제출(별도로 제출되는 제안서의 별첨자료는 스캔하여 포함)

사. 제안서는 목차에 의거하여 색인표를 부착하여야 하며, 각 장별로 번호를 부여하여야 함.

아. 제안서는 제안서 평가위원이 제안서 내용을 쉽게 파악할 수 있도록 ‘별지 서식11호’의 제안내용 조견표를 포함하여야 한다.

자. 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서 약어표를 작성하여 첨부함

(※보충 설명자료는 별지를 사용하여 작성함)

차. 제출된 제안서의 내용은 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주되며, 발주자가  요청하는 경우를 제외하고는 내용 변경이 불가함

카. 사업자는 본 관련 업무를 수행하면서 취득한 정보에 대해서는 비밀을 유지하여야 함

타. 사업자는 제안서를 사실대로 작성하여야 하며 허위의 사실이 발견되면 낙찰취소, 계약해지 될 수 있음.

3. 제안서 목차

구분	세부 목차
Ⅰ. 제안업체 개요	1. 일반현황 2. 경영상태 3. 동등이상 사업 및 유사사업 수행경험 4. 조직 및 인원 5. 투입인력 및 이력사항
Ⅱ. 전략 및 방법론	1. 사업이해도 2. 추진전략 및 구축 방법론 3. 이전 추진방안
Ⅲ. 기술 및 기능	1. 전산실 기반시설 부문 2. IDC자원 이전 부문 3. 인프라 신규 구축 부문
Ⅳ. 성능 및 품질관리	1. 성능 및 제안규격 요구사항 2. 품질 보증방안
Ⅴ. 프로젝트 관리	1. 관리방법론 2. 일정계획
Ⅵ. 프로젝트 지원	1. 비상복구 계획 2. 기술이전 및 안정화, 유지보수지원 방안 3. 보안관리 4. 교육훈련
Ⅶ. 기타	1. 제안내용 조견표 2. 정량적 평가 항목 자가 점검표

Ⅶ. 안내 및 유의사항

1. 제출서류

가. 기술제안서 및 구비서류 : 공고서에 의함.

나. 가격입찰 부문 : 공고서에 의함

2. 제안서 제출일정 및 방법

가. 제안서 제출기한 및 제출처 : 공고서에 의함.

나. 제출 방법

1) 제안서는 제출서류를 갖추어 입찰참가공문으로 대표자 또는 대리인이 방문하여     제출함 (우편 및 택배 접수 불인정)

2) 제출기한 내 미제출시 제안의사가 없는 것으로 처리하며 제출된 제반자료는 반환하지 않음.

3) 제안서를 포함하여 본 제안과 관련되어 제출된 모든 문서는 반환 및 공개하지 않으며,

본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안 사업자의 부담으로 함.

4) 질문사항 등은 문서 또는 FAX에 의해 제출하고 전화 등의 문의는 법적 효력을 갖지 못함.

(질문사항은 제출마감일 3일전까지 가능)

3. 제안서 설명회

가. 제안서 내용의 검토를 위해 추후 발주자가 지정하는 장소에서 제안서와 관련된 평가회를

실시할 수 있음.

나. 제안 발표는 사업자의 사업수행 PM이 직접 발표하여야 하며, 동영상 등을 이용한 간접

발표는 불허함.

다. 발주자는 제안서 설명회에 제안발표자가 사업자의 PM임을 입증토록 요청할 수 있으며,

사업자는 이에 응해야 함.

라. 제안 발표 시간은 한 업체당 발표 20분, 질의응답 10분을 기준으로 하고 제안서 평가회

참석인원은 각 사업자당 3명 이내로 함 .

마. 제안업체는 사업자 선정과 관련한 제안서 평가회에서의 논의․답변 및 제안한 내용에 대해서도

제안서와 동일한 법적인 효력을 가짐.

바. 제안서 평가회 불참 시 이로 인하여 제안서 평가에서 발생할 수 있는 불이익을 감수해야 함.

4. 입찰시 유의사항

가. 본 사업의 수행에 필요한 모든 비용(부가가치세 포함)은 가격입찰금액에 포함시켜야 하며,

산출내역서를 포함하여 가격입찰서류를 제출하여야 함

나. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰

참가자는 이에 응하여야 함

다. 사업자의 제안내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 사업자에 입증자료를 요구할 수 있으며,

입증자료를 제출하지 못할 경우 동 제안내용은 없음으로 간주함.

5. 기타 유의사항

가. 사업자는 사업수행과정에서 발생하는 안전사고 및 이에 따른 보상 등 제반사항에 대하여

모든 책임을 짐.

나. 사업자는 계약금액의 변동없이 계약내용을 변경함으로써 발주자에게 유리하다고 판단될

경우에는 계약내용에 대한 변경을 제안할 수 있으며, 이 경우 발주자의 승인을 받아야 함.

다. 본 제안요청서에 명시되어 있는 추진계획 등은 발주자 사정에 의해 실제 사업 추진 시

변경, 가감될 수 있으며 사업자는 적극 협조해야 함.

라. 입찰참여 업체는 계약진행 및 사업완료 후 유지관리 기간 동안 발주자의 감사 등의

사유로 본 사업 이행에 관한 자료 제출, 서류 열람 등의 활동에 적극 협력해야 함.

1) 본 사업이 발주자의 사정에 의하여 변경 또는 취소될 경우 이의를 제기할 수 없음.

2) 본 사업 수행과정에서 법․제도의 변경, 정부 및 발주자의 정책변경 등 현저한 사업 환경 변화가

있을 경우 사업이 변경 또는 중지, 취소될 수 있음.

3) 이 경우, 계약이전의 변경사항에 대하여는 계약 협상 시에 반영하여 계약토록 하고 계약후 발생되는 변경사항은 변경일 을 기준으로 정산토록 함.

4) 본 계약내용에 규정되지 않은 사항으로 계약이행과정에서 발생하는 분쟁은 발주자와

사업자 합의에 의하여 해결하도록 하며 합의가 이루어지지 않아 소송이 발생할 경우 관할

법원은 발주자의 소재지 관할법원으로 함.

마. 보안유지

1) 사업자는 용역 착수와 동시에 보안관리 책임자를 지정하여야 하고, 본 용역 수행 인력에 대해 보안각서 및 서약서를 징구하여 제출해야 함.

2) 사업자는 발주자의 보안관리 규정에 따라 성실히 보안관리 업무를 수행해야 함.

3) 사업자는 발주자로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은

정보를 당해 입찰 이외의 목적으로 사용하거나, 입찰과 직접 관련이 없는 제3자에게 공개

하여서는 안 됨.

【별지 서식 1호】

동등이상 사업 및 유사사업 수행실적(총괄표)

계 약 명	계약기관		계약기간	총계약금액 (천원)	사업 분야	도급형태	첨부 번호
	기관명	구분
			~
			~

주1) 기재방법

계약명 : 발주기관의 계약 명 기재

계약기관

▸기관명 : 원도급일 경우는 계약서상의 발주업체 명, 하도급일 경우는 발주기관 및 원도급 업체명

기재

▸구  분 : 공공기관, 일반으로 구분하여 기재

계약기간 : 과업기간(YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD) 기재

총 계약금액 : 관련협회가 발행한 사업실적 확인서 또는 과업 발주기관의 실적금액 기재(VAT포함)

동등이상 사업 또는 유사사업 분야 : IDC 이전 또는 전산장비 납품, 등 정보화 사업

도급형태 : 원도급, 공동도급, 하도급 구분 표시

붙임번호 : 별지3’의 “사업 수행실적 증명서’를 연번 順으로 첨부하여 해당번호 기입

주2) 본 양식에 기재되는 계약 명에 세부증빙 서류(계약서, 내역서등)를 첨부

※ 실적의 증명은 [별지서식 2]『사업 수행실적 증명서』(사본의 경우 원본대조필) 또는 한국소프트웨어산업협회에서 발행하는 ‘이행실적확인서’를 제출하며, 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 ‘증빙번호’ 란에 해당증명 첨부서류의 페이지를 기재

【별지 서식 2호】

사업 수행실적 증명서

당사는 아래 내용과 틀림없이 수행한 실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다.
아 래
계약내용	계 약 명			계약(발주)기관 (원도급자)
	계약금액			계약기간
용역 수행 내역	사업내용
	수주구분		원도급 실적 ( ) 하도급 실적 ( )
공동 도급 내역	공동도급여부		공동이행방식( ), 분담이행방식( ), 단독도급( )
	구 분		대표사	공동수행사		공동수행사
	회 사 명
	지 분 율 (또는 분담수행내역)
	실적금액(VAT포함)
	납품내역		* 입찰참가자격에서 요구하는 상세내용	* 입찰참가자격에서 요구하는 상세내용		* 입찰참가자격에서 요구 하는 상세내용
신청인	업체명(상호)				대표자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처	대한간호협회
발급기관	위 사실을 증명함. 2019년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (fax번호 : )
	발급부서 :

※ 협회에서 제시한 기본 서식이며, 발주(급)기관의 실적증명 양식이 相異할 수 있음에 따라, 수행 실적증명서 양식은 변경 가능함

【별지 서식 3호】

하도급 대금지급 비율 명세서
원도급자				하도급자
사 업 명				하 도 급 사 업 명
회 사 명				회 사 명
사업기간				하 도 급 기 간
원도급 금액	원			하도급 지급대금		원
하도급 지급 대금 세부내역	구분	기술 등급	①SW 월 노임단가	②투입인력 (MM)	③MM당 하도급 대가		④지급금액 (②x③)	⑤지급비율
	MM	기술사
		특급기술자
		고급기술자
		중급기술자
		초급기술자
		합 계
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다. 년 월 일 (원도급자) 직인 (하도급자) 직인
붙임서류 : 하도급 부문 산출 내역서

① SW 월노임단가 : SW산업협회에서 공표하는 일노임단가 × 근무일수

③ SW하도급 대가 : 원도급자가 하도급자에게 지급하는 직접인건비 + 제경비 + 기술료

⑤ 지급비율 : ∑지급급액 ÷ ∑(SW 월노임단가 × 투입인력)

【별지 서식 4호】

[별지 제10호서식] <신설 2008.9.3>				※ 이 서식은 전자신청이 가능한 서식입니다 (앞쪽)
□하도급 소프트웨어사업 계약승인신청서 □재하도급							처리기간
							30일
원도 급자	상호				대표자
	사업자등록				소 재 지
하도 급자	상호				대표자
	사업자등록				소 재 지
재하 도급자	상호				대표자
	사업자등록				소 재 지
사업 내용	계약명		계약번호			계약금액
	계 약 일		계약기간		년 월 일 ～ 년 월 일
하도급 내용	계약명				하도급액
	계약(예정일)		계약기간		년 월 일 ～ 년 월 일
	하도급 내역 및 사유	(* 필요시 별지 사용)
재하도급내용	계약명				재하도급액
	계약(예정일)		계약기간		년 월 일 ～ 년 월 일
	재하도급 내역 및 사유	(* 필요시 별지 사용)
「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3 및 같은 법 시행규칙 제8조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인: (서명 또는 인) 발주기관의 장 귀하
※ 구비서류 1. 하도급(또는 재하도급) 계약서(세부 산출내역서 포함)(안) 2. 하도급(또는 재하도급) 사업수행계획서(세부 사업추진일정표 포함)

【별지 서식 5호】

하도급 사업수행계획서

● 하도급계약명 :

원도급자 : A사 (주)           하도급자 : B사 (주)

Ⅰ. 하도급 목적 및 기대효과

1. 목적

2. 추진전략

3. 추진방안

4. 기대효과

Ⅱ. 하도급 일반사항

1. 하도급기간

2. 하도급업무범위(책임과 권한)

3. 추진조직

4. 투입인력 및 투입자원

5. 업무추진계획

6. 품질확보방안

Ⅲ. 세부사업추진일정

Ⅳ. 보안계획

* 원도급사업의 보안관련 요구사항에 부합하게 작성

【별지 서식 6호】

하도급 적정성 판단 자기평가표

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항
사 업 명		하 도 급 사 업 명
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
계약금액	원 (하도급 부분금액(A) : 원)	하도급액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간
국가기관등과의 낙찰방식,낙찰율	방식, %	하도급율 (B/A)	%

※1) 하도급율(%) = (하도급액(B) / 하도급 부분금액(A)) × 100

2) 하도급액 : 하도급 계약서(산출내역서)상의 소프트웨어사업비

3) 하도급 부분금액 : 원도급 계약서(산출내역서)상의 소프트웨어사업비 중 하도급 되는 사업부문에 해당하는 소프트웨어사업비

2. 자기평가결과

판 단 항 목			배 점	배점 사유
1. 하수급인의 자격 (부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부)
2. 하수급인의 사업수행능력 (40점)	가. 사업수행실적	①
	나. 고용안정 및 적법근로	②
	소 계
3. 하도급 계약방식 (60점)	가. 하도급대금 지급방식의 적정성	①
	나. 하도급 금액의 적정성	②
	소 계
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
		③		(가점사유)
	소 계
합 계

【별지 서식 7호】

청렴서약서(외부)

□ 업무담당자 : (소속:               담당자:            )

□ 관련 건명 :

본인(개인, 법인은 대표자 또는 법인)은 상기의 계약(약정, 입찰,

위임등)과 관련하여 그 당사자(참가자)로써 공명정대하고 청렴하게 임하여 다음 사항을 준수하겠습니다.

하나, 본인은 입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 담합, 압력, 청탁, 배임, 불공정거래 등 일체의 비윤리적 행위를 하지 않겠습니다.

하나, 본인은 입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 거래 당사자인 귀사의 담당자에게 직․간접적으로 금품․향응 등 접대나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

하나, 본인은 협회의 청렴서약제도의 취지를 이해하고 입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 당사자 간의 비윤리적 행위와 귀사의 담당자등이 금품 등을 요구한 경우 즉시 신고하겠습니다.

이를 위반하여 부정당업자로 제재를 받을 경우 제재기간은 국가계약법 시행규칙 별표에서 정한 기간으로 하며, 이 경우 시행규칙 제76조 제4항의 규정에도 불구하고 제재기간을 경감할 수 없으며, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2019.     .      .

서약자 :                  회사 대표            (인)

대한간호협회 회장 귀하

【별지 서식 8호】

제안내용 조견표(목차)

평가부분	평가항목내용	관련 페이지	비고
일반	경영상태
수행능력	신용평가등급 확인서
	최근 3년간 구축사업 실적
기술인력(이행능력) 현황	기술자 보유 및 투입현황
	제안사업의 기술적 이해 및 적정성
	제안요청서와의 부합성 및 창의성
전략 및 방법론	사업범위의 명확성 및 추진전략
	제안기술 및 내용의 실현 가능성
	이전 실행계획 수립의 적정성 및 구체성
	신규장비 구축 분석 방안의 적성성 및 효율성
신규 장비 구축 분석방안	이전 및 구축 추진전략의 적정성
	목표시스템 제안의 적정성
기술 및 기능	정보시스템 구성 방안의 적정성
	신규도입 장비제시에 대한 효율성 및 적정성
	향후 시스템의 유연한 확장에 대한 적정성
규정준수방안	법률, 규정, 가이드 준수 방안
	신규 시스템의 H/W, S/W도입의 적정성
	사업수행 조직체계 및 참여인력의 적정성
	사업관리 방안의 적정성 및 자원배분의 합리성
H/W, S/W 도입 적정성	세부추진일정의 적정성
	세부일정계획 도출 및 기간의 타당성
품질보증계획	구축 성능 및 품질 보증을 위한 방안

【별지 서식 9호】

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호	(FAX)
회사(기관) 설립년도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

【별지 서식 10호】

재 무 현 황

구 분	2016년	2017년	2018년	합 계	평 균
총자산
유동부채
고정부채
유동자산
당기순이익
총매출액

※ 최근 3년간의 재무현황을 기재. 신규 설립업체로 자료가 없는 경우에는 당해연도

추정치를 2018년도에 기재

※ 결산 공고된 최근 3년간 재무제표 등 결산서를 '붙임'으로 반드시 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료는 인정하지 않음

※ 신용평가등급확인서 1부

【별지 서식 11호】

조직 및 인원현황

1. 사업자 조직 및 인원현황

2. 과업 수행조직 및 인원현황

						사업 책임자
부문					부문						부문					부문

※ 분야 책임자를 명시하되 기재 순서는 평가 시 참고 될 수 있도록 직위(서열)별로 작성하고, 주요 자격 또는 역할을 기재함

※ 발주기관에서 제시한 기본 서식이며, 상기 조직도의 기준을 자체 실정에 맞게 변경 가능함

【별지 서식 12호】

참여기술자 자격사항 등 요약

구분	분야별	성명	연령 (세)	기술등급	본사업 참여직위	최종학력	자격증	담당업무
전담 참여	사업책임자
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
비전담 참여	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문

【별지 서식 13호】

책임자 이력사항

1. 일반 이력사항

소 속							직 책
성 명		국 문			한 문
		영 문
생년월일		(만 세) ※ 주민등록번호 앞 6자리만 기재
주 소		직 장
		자 택
연 락 처		직 장
		자 택
		기 타
학력	기 간 (부터～까지)			학 교		전 공			학 위
	년 월 ～ 년 월
	년 월 ～ 년 월
	년 월 ～ 년 월
일반 경력	기 간 (부터～까지)			소 속 기 관		직 위 (급)			비 고
	년 월 ～ 년 월
	년 월 ～ 년 월
	년 월 ～ 년 월
	년 월 ～ 년 월

2. 본 사업 유사 경력사항

임무			사업참여기간				참여율		%
경 력
사 업 명		참 여 기 간 (년 월 ～ 년 월)			담 당 업 무	발 주 처		비 고

【별지 서식 14호】

투입 인력별 이력사항

구분			성명			소속		직책			연령	세
학력		대학교 전공						해당분야 근무경력
		대학원 전공						자격증
본 사업 참여임무						본 사업 참여기간					본 사업 참여율	%
경 력 사 항
사 업 명				사 업 개 요			참 여 기 간 (년. 월 ∼ 년. 월)		담당업무		발주처		비고

주) 기술등급은 “한국정보통신공사협회” 또는 한국소프트웨어산업협회 「기술자 경력증명서」로 경력을 산정하며, 「기술자 경력증명서」가 없을 경우, 붙임2의 기술등급 인정 기준표에서 정한 관련 자격증 및 졸업증명서를 근거하여 4대보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험) 납부내역으로 기술등급 경력을 산정함.

※ 붙임2 기술등급 인정 기준표 참조

【별지 서식 15호】

제조사 (정품)공급 및 기술지원 확약서

수    신 : 대한간호협회

참    조 :

사 업 명 :

당사는 상기 사업에 대하여 귀 대한간호협회와                   의 계약 시 공급하게 될 장비는 당사가 직접 제조하고 그 품질을 보증하는 정품임을 증명하며, 기술지원을 확약합니다.

- 아      래 -

제 조 사		공급받는 회사
제 품 명		수량

년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                   (인)

【별지 서식 16호】

제조사 규격 증명서

수    신 : 대한간호협회

참    조 :

사 업 명 :

당사는 상기 사업에 공급하는 장비가 대한간호협회의 요구규격을 충족함을 확인합니다.

구 분	요구규격	제안규격	충족여부	비고

년    월    일

주    소 :

제 조 사 :

대표이사 :                     (인)

【별지 서식 17호】

<< 공동수급표준협정서(공동이행방식) >>

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

【붙임 1】

외주 용역사업 보안특약

① 사업자는 대한간호협회(이하 ‘협회’이라 한다)의 보안정책을 위반하였을 경우  [별표1]의 ‘사업자 보안위규 처리기준’의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 ‘보안 위약금 부과 기준’에 따른 위약금을 공사에 납부하여야 하며, 법적 민․형사상 책임 및 손해배상은 별도로 한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 공사는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업자는 사업 수행과정에서 참여 인력 교체가 필요한 경우 요청 공문을 통해 공사의 사전 승인을 득해야 한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상 정보

2019년   월   일

	“甲”	서울특별시 중구 동호로 314(쌍림동 88-7)
		대한간호협회 회장 신경림
		위 대리인 전략기획실 ICT팀 (인)
	“乙”	주 소
		회 사 명
		대표이사

【붙임 2】

보 안 서 약 서

본인은 2019년    월    일부로 ICT 센터 구축 사업과 관련한 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는 대한간호협회 ICT 센터 구축 사업과 관련된 소관업무가 협회기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

2019년   월    일

[ 서약자 ]

소속	이름	직급	생년월일	서명

대한간호협회 회장 귀하

【붙임 3】

기술등급 인정 기준 표

구분	자격증 기준	학력・경력 기준
기술사	ㆍ기술사
특급 기술자	ㆍ고급기술자 자격 취득 후 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람	ㆍ박사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ석사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ학사학위를 가진 자로서 12년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람
고급 기술자	ㆍ중급기술자 자격 취득 후 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ박사학위를 가진 자로서 기사자격을 취득한 자	ㆍ박사학위를 가진 자 ㆍ석사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ학사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ전문대학을 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ고등학교를 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람
중급 기술자	ㆍ기사 자격을 취득한 자로서 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ산업기사 자격을 취득한 자로서 7년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ기사자격을 취득한 자로서 석사학위 취득 후 2년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람	ㆍ석사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ학사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 ㆍ고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람
초급 기술자	ㆍ기사 자격을 취득한 자 ㆍ산업기사 이상의 자격을 취득한 자	ㆍ석사학위를 가진 자 ㆍ학사학위를 가진 자 ㆍ전문대학을 졸업한 자 ㆍ고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람

【 비고 】  “소프트웨어 기술자”의 범위는 소프트웨어산업진흥법 제2조 5호에서 정한 바에 따름

소프트웨어산업 진흥법 제2조(정의)

⑤ "소프트웨어기술자"란 「국가기술자격법」에 따라 정보처리 분야의 기술자격을 취득한 사람 또는 소프트웨어 기술 분야에서 대통령령으로 정하는 학력이나 경력을 가진 사람을 말한다.

소프트웨어산업 진흥법 시행령 제1조의2(소프트웨어기술자의 범위)

① 「소프트웨어산업 진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제5호에서 "대통령령으로 정하는 학력이나

경력을 가진 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. 「초·중등교육법」 제2조제3호 또는 「고등교육법」 제2조에 따른 각급 학교에서 소프트웨어 기술 분야를

전공한 사람

2. 소프트웨어 기술을 가진 사람으로서 소프트웨어 기술 분야에서 일정 기간 경력을 갖추거나 근무한 사람

3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 따른 기준과 같거나 그 이상의 학력 또는 경력이 있다고 인정되는 사람

② 제1항에 따른 소프트웨어기술자에 대한 세부적인 인정 기준 및 절차·방법 등은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한다.

※  “기술자격자” 중 기술사, 기사, 산업기사, 기능사는 「국가기술자격법」의 기술자격종목 중 다음 각 목의 정보처리 분야 기술자격을 취득한 자를 말한다.

가. 기술사 : 정보관리, 컴퓨터시스템응용

나. 기사 : 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안

다. 산업기사 : 정보처리, 사무자동화, 정보보안

라. 기능사 : 정보처리, 정보기기운용

경력인정 기준

근무경력확인서 또는 재직증명서 또는 국민연금납부실적증명서

가. 근무경력확인서(소프트웨어산업협회 발급, 근무한 회사 경력증명서)

나. 재직증명서(근무한 각 회사 발급)

다. 국민연금납부실적증명서(국민연금공단 발급)

- 근무경력확인서, 재직증명서 확인불가 시

[별표 1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업 참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 4. 사업 참여인력 임의교체	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표 2]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A～D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	사업대가의 3%	사업대가의 2%	사업대가의 1%

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안 사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 3]

누출금지 대상 정보

1. 발주기관 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치

등 네트워크 장비 설정 정보

8. 발주기관에서 보유·관리하는 개인정보

9. 그 밖에 내부 담당자가 공개가 불가하다고 판단한 자료